DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
		Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
		Pobočka Kutná Hora
Adresa:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená:		Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora
		tel. +420 
V technických věcech oprávněn 
jednat:			 
			
Adresa:			Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:			
E-mail:			khora.pk@spucr.cz
ID DS:				z49per3
Bankovní spojení:				
IČ/DIČ: 			01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:						GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa:					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	
Telefon:			
E-mail:			
ID DS:			wyx77xh
Bankovní spojení:				
IČ:	61251437
DIČ	CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C.234  

Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – JPÚ Vraník, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že:
-	došlo k chybnému stanovení délky ZPH způsobené chybou software při zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky (nutné navýšení o 17 MJ - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a o 1 MJ -  Zjišťování hranic neřešených)
-	na základě žádosti účastníků řízení a z důvodu vyrovnání katastrální hranice v místě, kde na sebe navazuje KMD a mapa analogová, došlo k rozšíření obvodu o 3 ha. To se odrazí v navýšení cen u etap fakturovaných podle celkové výměry upravovaného území (etapa 3.1.4. Rozbor současného stavu, etapa 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků, etapa 3.2.1.                             Vypracování plánu společných zařízení, etapa 3.2.2. Vypracování návrhu a etapa 3.3. Mapové dílo), a bude nutné zajistit dodatečné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty, protože etapa 3.1.2. již byla dokončena a odevzdána. Dodatečné měření polohopisu bude odevzdáno do 28.3.2017.
-	došlo k souběhu zpracování etapy č. 1.3 (Zjišťování hranic obvodů) s dokončováním KMD v katastrálním území Ledečko (posunutí termínu plnění o 4 měsíce).

Vzhledem k výše uvedenému dochází ke změně celkové ceny za zpracování návrhu JPÚ Vraník:
Původní celková cena  – 378 800,- Kč bez DPH
Nová celková cena JPÚ Vraník – 430 550,- Kč bez DPH (520 966,- Kč včetně DPH)

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Kutné Hoře dne:

…………………………
Ing.. Mariana Poborská
Vedoucí Pobočky Kutná Hora

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne:

…………………………
Ing. Pavel Cimpl 
jednatel  

	

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vraník					
							
 	Hlavní  celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez
DPH v Kč	Cena bez DPH
celkem v Kč 	Termín 
ukončení
 	
3.1.	Přípravné práce	 	 	 	 	 	
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	 bod	0 	 	0 	31.7.2016	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4 	3 500 	14 000 		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	31	1 500 	46 500 	30.11.2016, došetření dle dodatku č.1 - 28.3.2017 	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500 	7 500 		
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	 100 bm	51	1 750 	89 250 	31.5.2017	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	 100 bm	6	1 750 	10 500 	31.5.2017	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	4	1 000 	4 000 	společně s DKM	
3.1.4.	Rozbor současného stavu                      	ha	36	500 	18 000 	31.8.2017	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	36	800 	28 800 	31.8.2017	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	 	 	 	218 550	31.8.2017	
3.2.	Návrhové práce	 	 	 	 	 	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	36	1 750 	63 000 	28.2.2018	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	2	3 000 	6 000 		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	6	1 500 	9 000 		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	4	1 500 	6 000 		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	36	1 800 	64 800 	31.8.2018	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000 	10 000 	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	 	 	 	158 800	31.8.2018	
3.3	Mapové dílo	ha	36	1200	43 200 	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	20	500	10 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 	
    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) 
bez DPH v Kč 	 	 	10 000	 	
							
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	 	 	 	 	 	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	 	 	 	218 550 Kč
 	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	 	 	 	158 800 Kč
 	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	 	 	 	43 200 Kč
 	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	 	 	 	10 000 Kč
 	
Celková cena bez DPH v Kč	 	 	 	430 550 Kč
 	
DPH  21% v Kč	 	 	 	90 416 Kč
 	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	 	 	 	520 966 Kč

V Kutné Hoře dne     	 V Pardubicích dne	
Za objednatele:	Za zhotovitele:	

…………………………………………	…………………………………………………………………….	
Ing. Mariana Poborská	Ing. Pavel Cimpl	
vedoucí Pobočky Kutná Hora	jednatel společnosti				

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).	
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.	
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.	
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.	
5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.	
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.				
7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.